▣ 용인테크노밸리 일반산업단지 조성사업

□ 입주현황                       (2020.04.30.기준, 단위:건)

구분	산업	복합	지원	계	비율
분양계약	83	36	21	140	100%
입주계약	56	16	5	77	55%
건축허가	37	10	5	52	37%
건축착공	29	8	5	42	30%
건축준공	13	5	5	23	16%
공장등록	8	5	5	18	13%

□ 토지이용계획도                                  [★ : 소공원①]

★

□ 추진현황

○ 2008.06. : 지구지정 및 개발계획  승인

○ 2014.07. : 용인테크노밸리 조성 협약(MOU) 체결

○ 2015.06. : SPC설립(주주 : 市, 한화도시개발, 한화건설)

○ 2015.12. : 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 승인

○ 2016.09. ~ 2017.08. : 산업시설용지·복합용지 분양 완료

○ 2016.12. : 산업단지 공사 착공

○ 2017.03. : 사업비(300억이내) 지원 협약 체결

○ 2017.07. : 지원시설‧주차장‧주유소용지 분양 완료

○ 2018.09. : 입주계약체결 등 공장설립 업무 지원 착수

○ 2019.04. : 임시전력 공급 및 통수 완료

○ 2019.06. : 공공시설물 합동점검 실시

○ 2019.12. : 지정(개발계획) 변경 및 실시계획 변경 승인(기간연장)

○ 2020.05. : 용인테크노밸리 일반산업단지 준공

□ 향후 추진계획

○ 2020.05. : 공공폐수처리시설 시운전 착수(유부하 3개월 소요)

○ 2020.06. : 토지등기 정리 및 소유권 이전

○ 2020.09. : 공공시설물 인수인계 진행

□ 기대효과

○ 기업유치에 따른 인구유입, 고용창출 및 지역경제 활성화

○ 전후방 산업들의 매출액 증대 및 주변 지역의 상권 활성화